Príloha č. 1									A/2014/19557

Špecifikácia predmetu zákazky

pre zákazku s názvom:

Obstarávanie zmien a doplnkov Regulačného plánu VIII. okrsok Dargovských hrdinov Košice – aktualizácia 

Prípravné práce (september 2014)
- Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky Regulačného plánu VIII. okrsok Dargovských hrdinov Košice (ďalej ÚPD)
- Sústredenie územnoplánovacích dokladov v súlade s § 3-7 Stavebného zákona (č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a ostatných Podkladov podľa §7a Stavebného zákona (č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku), Určenie záväznosti a možnosti ich využitia 
- Úprava zadania pre aktualizáciu ÚPD 
- Oznámenie o strategickom dokumente

Spracovanie ÚPD pred prerokovaním (október / november 2014 vrátane prerokovania)
- Vstupná koordinačná porada na referáte Útvar hlavného architekta (ďalej ref. ÚHA)
- Koordinačná porada so spracovateľom
- Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD
- Kontrola plnenia požiadaviek obstarávateľa v návrhu ÚPD pred expedíciou na prerokovania
- Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPD s dotknutými orgánmi
- Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPD s verejnosťou
- Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPD s vlastníkmi regulovaných pozemkov
- Žiadosť o záväzné stanovisko Okresného úradu Košice (ďalej OÚ KE), podľa §28 zákona o vodách
- Žiadosť o stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
- Žiadosť o stanovisko OÚ KE § 9 zákona o Zákona o ochrane prírody a krajiny
- Prerokovanie návrhu ÚPD s dotknutými orgánmi
- Prerokovanie návrhu ÚPD s verejnosťou
- Prerokovanie návrhu ÚPD s vlastníkmi regulovaných pozemkov

Spracovanie ÚPD po prerokovaní (december 2014 až január 2015 podľa termínu MZ KE)
- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPD
- Dohľad nad úpravou návrhu ÚPD podľa akceptovaných pripomienok, (v prípade potreby zabezpečenie opätovných stanovísk od dotknutých orgánov a organizácií)
- Opätovné prerokovanie neakceptovaných pripomienok
- Spracovanie žiadosti a dokumentácie na preskúmanie návrhu ÚPD podľa §25 Stavebného zákona (č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)
- Preskúmanie ÚPD – spoluúčasť
- Spracovanie podkladov a schvaľovacích dokumentov pre poradu primátora, Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo v Košiciach (správa, grafické podklady, formálna úprava), účasť na rokovaní MZ KE
- Dohľad nad spracovaním čistopisu ÚPD
- zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti zmien a doplnkov Regulačného plánu VIII. okrsok Dargovských hrdinov Košice – aktualizácia, VZN (vrátane príloh) na pripomienkovanie – na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta
- Spracovanie registračného listu ÚPD a súčinnosť pri jeho doručení Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR

Osoba s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie ÚPD bude riadiť a dohliadať na celý proces spracovania a prerokovania „zmien a doplnkov Regulačného plánu VIII. okrsok Dargovských hrdinov Košice – aktualizácia“ v súlade s navrhovanými časovými lehotami (uvedené v zátvorkách) a v súlade s §19a Stavebného zákona (č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Prípadné zmeny termínov je vybraný obstarávateľ povinný prerokovať a koordinovať s ref. ÚHA mesta Košice.

Lehota na uskutočnenie služby: predpokladaný termín koniec januára 2015 

Splatnosť faktúry: 30 dní