Príloha č.1									          A/2014/17444

Špecifikácia predmetu zákazky

Zadanie upresňujúce objednávku na spracovanie zákazky „Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany - lokality „Oblá ulica“, „Pri cintoríne -záhrady„
rozsah a termíny:

Prípravné práce:
- koordinačná porada so spracovateľom a ref. ÚHA - riešené lokality:
lokalita č. 1 – „Oblá ulica – radové rodinné domy“ – preveriť intenzitu a formu radovej zástavby 4 rodinných domov pri Oblej ulici a spôsob jej dopravného sprístupnenia
lokalita č. 2 – „Pri cintoríne - záhrady“ – navrhnúť intenzitu a formu zástavby a spôsob jej dopravného sprístupnenia z existujúcich obslužných komunikácií

Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov pre potreby prerokovania - 01.08. až 30.9.2014:
- návrh Zmien a doplnkov vo vybraných lokalitách v nižšie uvedenom obsahu a rozsahu
- účasť na prerokovaní návrhu ÚPD s dotknutými orgánmi
- účasť na prerokovaní návrhu ÚPD s vlastníkmi regulovaných a dotknutých pozemkov

Obsah výstupu:
Textová časť:
Sprievodná správa
Záväzná časť – regulatívy pre územný rozvoj MČ Kavečany
Grafická časť:
Komplexný urb. návrh a doprava 					M 1:  2 000
Riešenie infraštruktúry (voda, energetika)				M 1:  2 000
Doložka civilnej obrany						M 1:  2 000

Rozsah a odbornosť výstupu:
- jednotlivé odborné časti ZaD ÚPN Z Kavečany musia byť spracované odborne spôsobilou osobou
- v priebehu spracovania je potrebné riešenie prerokovať so zadávateľom (ref. ÚHA) s MÚ MČ Košice – Kavečany, správcami komunikácií a správcami inžinierskych sietí 
- návrh ZaD ÚPN Z Kavečany ako aj čistopis bude spracovaný digitálne a odovzdaný obstarávateľovi 6-krát v tlačenej papierovej forme, v zodpovedajúcom formáte, vložený do tuhého A4 obalu s priloženou správou a jedenkrát ako digitálny záznam na CD nosiči, pozn. (obstarávateľ poskytne návrh ZaD ÚPN Z Kavečany Obvodnému úradu Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného plánovania a mestskej časti Kavečany)

Spracovanie Zmien a doplnkov po prerokovaní – 30.09. až 30.11.2014 (podľa termínu MZ KE):
- zapracovanie akceptovaných pripomienok z vyhodnotenia do finálneho návrhu ÚPD
- spracovanie schvaľovacích dokumentov ÚPD (text a grafika) pre potreby PP, MR a MZ KE

Lehota na dodanie predmetu zákazky: vyplýva z termínov MZ – predpokladá sa do konca roka 2014.

Splatnosť faktúry: 30 dní